ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   843 /QĐ- CTUB                        Quy Nhơn,  ngày  12   tháng   4  năm  2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán bổ sung 
                               Hạng mục: Đê chắn cát, nạo vét luồng và khu neo đậu
Công trình :  Bến cá Đề Gi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
	- Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-CTUB ngày 26/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán; Quyết định số 1933/QĐ-CTUB ngày 06/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp hạng mục đê chắn cát, nạo vét luồng thuộc công trình Bến cá Đề Gi;
	- Căn cứ Báo cáo số 02/KQTĐ ngày 01/4/2005 của Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng Hà Nội về Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hạng mục Đê chắn cát và nạo vét luồng tàu thuộc công trình Bến cá Đề Gi;
- Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát tại văn bản số 117/TT-UB ngày 05/4/2005, đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 370/GTVT-TĐ ngày 07/4/2005;

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1: Phê duyệt thiết kế – dự toán bổ sung công trình xây dựng, với các nội dung sau:
1- Tên công trình:	 Bến cá Đề Gi
     Hạng mục : - Đê chắn cát
                         - Nạo vét luồng, khu neo đậu.
2- Địa điểm XD: 	Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
3- Chủ đầu tư:	UBND huyện Phù Cát  
4- Nội dung bổ sung:  
    4.1- Đê chắn cát: 
    - Tăng bê tông tấm lát kích thước 2 x 3 x 0.4 (m): 67 tấm; tăng bê tông tấm lát kích thước 2 x 1.5  x 0.45 (m): 279 tấm. 
     - Bổ sung khối Tetrapod loại T3 nặng 02 tấn: 877 khối.
Chi tiết theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công bổ sung hạng mục công trình do Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế – Bộ Thuỷ sản thực hiện tháng 01/2005.
    4.2- Bổ sung chi phí bảo hiểm công trình: Chi phí bảo hiểm công trình được bổ sung phù hợp với Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính: 200.621.000 đồng.
	5- Dự toán bổ sung:	 	2.477.199.000 đồng
(Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm chín mươi chín ngàn  đồng)
          Trong đó: + Giá trị xây lắp:     1.949.119.000 đồng
                           + Chi khác:	                528.080.000 đồng
                              (trong đó chi bảo hiểm: 200.621.000 đồng)
	Giá trị xây lắp nêu trên đã được tính theo đơn giá trúng thầu được duyệt.
	6- Tổ chức thực hiện: Giao đơn vị trúng thầu tiếp tục thi công phần điều bổ sung nêu trên.
	Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để lập kế hoạch vốn và cấp phát vốn. Khi thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

	Điều 3: Quyết định này bổ sung Quyết định số 1142/QĐ-CTUB ngày 26/4/2004 và Quyết định số 1933/QĐ-CTUB ngày 06/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
	Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                          		                      KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
  Nơi nhận :					                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3 ;				
- Lưu VP, K10. 

			
								  Nguyễn Văn Thiện